1. Наименование проекта:
«Комплексное развитие городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края»

2. Место реализации проекта:

N п/п	Наименование района субъекта Российской Федерации	Наименование населенного пункта 1	Вид населенного пункта	
1	2	3	4	
1	Муниципальный район «Агинский район»	Орловский	поселок городского типа	
2	Муниципальный район «Агинский район»	Дэлбэрхэй	село	
3	Муниципальный район «Агинский район»	Занта	село	

     3. Цель проекта - комплексное развитие городского поселения «Орловский»
                                                     наименование территории реализации проекта

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

N п/п	Наименование задач	Уровень задач	Целевое значение	Решаются в рамках проекта да/нет	Фактическое значение на 01.01.2019	Значение, достигаемое
по итогам реализации проекта	
1	2	3	4	5	6	7	
1	повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	ГП
КРСТ	до 80% к 2026	да	67,9 %	80,1 %	
2	повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах территории реализации проекта	ГП
КРСТ	до 50% к 2026	нет	11 % <*>		
3	сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта	ГП
КРСТ	100%	да	100 %	100,1%	
4	обеспечение в границах территории реализации проекта доступа домохозяйств к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ВЦП
СОСТ	до 95% к 2026	нет	75 %		
5	обеспечение в границах территории реализации проекта доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольное образование в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	ВЦП
СОСТ	до 70% к 2026	нет	100 %		
6	Обеспечение в границах территории реализации проекта доли сельского населения систематически занимающегося физической культурой и спортом	ВЦП
СОСТ	до 55% к 2026	да	30 %	55%	
7	обеспечение общеобразовательных организаций в границах территории реализации проекта инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация)	ВЦП
СОСТ	до 100% к 2026	нет	100 %		
8	Обеспечение в границах территории реализации проекта уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом	ВЦП
СОСТ	до 72% к 2026	нет	0 %		
9	обеспечение доли населения в границах территории реализации проекта питьевой водой	ВЦП
СОСТ	до 80% к 2026	нет	100 %		
10	обеспечение доли жилищного фонда в границах территории реализации проекта канализацией	ВЦП
СОСТ	до 65% к 2026	нет	1 %		
11	сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-акушерского пункта для населения, проживающего на территории реализации проекта	ВЦП
СОСТ	до 6 км. к 2026	нет	25 км		
12	сокращение среднего радиуса доступности образовательных учреждений для населения, проживающего на территории реализации проекта	ВЦП
СОСТ	до 6 км. к 2026	нет	25 км		
13	Создание новых рабочих мест	ВЦП
СОСТ	XXX	нет	XXX	ххх	
14	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Забайкальского края	ГП
ЗК КРСТ	не менее 31,6 % к 2026	да	0,65 %	31,6 %
	
15	Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	ГП ЗК КРСТ	до 60 % к 2026	да	67,9 %	80,1 %	
16	Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	ГП ЗК КРСТ	до 20 % к 2026	нет	11 % <*>		

<*> - в с. Дэлбэрхэй, с. Занта частный сектор, центральным отоплением, канализацией и т.д. жилой фонд не оснащен; в пгт. Орловский преимущественно частный сектор, центральным теплоснабжением, водоснабжением обеспечен жилой фонд, расположенный в центральной части населенного пункта, из которого центральная канализация имеется в нескольких домах. 

4. Участники проекта:

N п/п	Участники проекта	Наименование	
1	2	3	
1	Ответственные исполнители	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края;
Администрация муниципального района «Агинский район»	
2	Заявитель	Министерство сельского хозяйства Забайкальского края	
3	Инициаторы	Администрация городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края	

4.1. Ответственные за разработку и реализацию проекта: 1

N п/п	Уровень ответственности	Ф.И.О 3, должность	контактные данные
(телефон, адрес электронной почты)	
1	2	3	4	
1	Ответственный за разработку паспорта проекта	Будажапов Батор Будажапович – глава городского поселения «Орловский»	тел. 8 (30239) 3-73-25
admin.orlovsk@mail.ru 	
2	Технический исполнитель по формированию паспорта проекта	Специалисты отдела социального развития села Министерства сельского хозяйства Забайкальского края:
Маслова Наталья Юрьевна – начальник отдела;
Ли Ольга Петровна – главный специалист-эксперт отдела;
Ивкина Екатерина Викторовна – главный специалист-эксперт отдела;
Будажапов Батор Будажапович – глава городского поселения «Орловский»	тел. 8 (3022) 36-49-05; 
36-49-28
srs@mcx.e-zab.ru 

maslova@mcx.e-zab.ru 

lee@mcx.e-zab.ru 

ivkina-ekaterina@mail.ru 

тел. 8 (30239) 3-73-25
admin.orlovsk@mail.ru

3	Ответственный за реализацию проекта в целом	Бочкарев Денис Юрьевич – министр сельского хозяйства Забайкальского края	тел. 8 (3022) 36-49-66
pochta@mcx.e-zab.ru 
	
4	Ответственные за реализацию отдельных мероприятий проекта 2	Жапов Жаргал Владимирович – глава муниципального района «Агинский район»;
Будажапов Батор Будажапович – глава городского поселения «Орловский»	тел. 8 (30239) 3-46-84
aginskmr@mail.ru 

тел. 8 (30239) 3-73-25
admin.orlovsk@mail.ru
	
5	Ответственный за подготовку промежуточной и годовой отчетности о реализации проекта	Специалисты отдела социального развития села Министерства сельского хозяйства Забайкальского края:
Маслова Наталья Юрьевна – начальник отдела;
Ли Ольга Петровна – главный специалист-эксперт отдела;
Ивкина Екатерина Викторовна – главный специалист-эксперт отдела	тел. 8 (3022) 36-49-05; 
36-49-28
srs@mcx.e-zab.ru 

maslova@mcx.e-zab.ru 

lee@mcx.e-zab.ru 

ivkina-ekaterina@mail.ru 

5. Перечень мероприятий проекта и сроки их реализации:

N п/п	Наименование мероприятий 3	Начало реализации	Завершение реализации 4	Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической
зоны (да / нет) 5	
1	2	3	4	5	
	пгт. Орловский 		
1	Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»	2021	2021	нет	
2	Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»	2021	2021	нет	
	с. Дэлбэрхэй, с. Занта, пгт. Орловский	
3	Приобретение автобуса Газель НЕКСТ	2021	2021	нет	
Итого сроки реализации проекта (год):	2021	2021	xxx	

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта:

N п/п	Наименование мероприятия	Показатели, характеризующие объекты и оборудование в составе мероприятий	Общая стоимость, тыс.рублей 2	Сметная стоимость, тыс.рублей	
		Наименование показателей 1	Значение показателей			
1	2	3	4	5	6	
	пгт. Орловский	
1	Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»	Вместимость, чел.	264	17 682,02	17 463,02	
		Площадь, 
кв. м.	573,0			
2	Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»	Площадь, 
кв. м.	480,0	3 060,546	3 036,546	
	с. Дэлбэрхэй, с. Занта, пгт. Орловский	
3	Приобретение автобуса Газель НЕКСТ	Вместимость, чел.	17	Запрос коммерческих предложений	ххх	
		Мощность, л.с.	106,8			

7. Наличие по мероприятиям проекта, актуальных проектно-сметных документации, смет стоимости работ и их положительных заключений государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:

N п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие наличие проектно-сметной документации 1	Документы, подтверждающие наличие положительного заключение главной государственной экспертизы на проектно-сметную документацию 2	
1	2	3	4	
	пгт. Орловский 	
1	Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»	Требуется ПСД. 
Выполнены ИП Дамбаев Б.Б. (на основании Договора подряда № Ор-1 от 13.09.2019 г.):
Сводный сметный расчет стоимости строительства (МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»; 687510, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Орловский, ул. Клубная, д. 17):
Локальный сметный расчет № 02-01-01: Подготовительные работы;
Локальный сметный расчет № 02-02-02: Общестроительные работы;
Локальный сметный расчет № 02-01-03: Капитальный ремонт системы отопления;
Локальный сметный расчет № 02-01-04: Электромонтажные работы;
Локальный сметный расчет № 02-01-05: Видеонаблюдение;
Локальный сметный расчет № 04-01-06: Теплотрасса;
Локальный сметный расчет № 07-01-07: Пуско-наладочные работы.	Не требуется актуализация. Положительное заключение экспертизы на сметную стоимость № 75-1-0602-19 от 18.10.2019 г., выполнено ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края. 
	
2	Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»	Требуется ПСД. 

Выполнена МП «Агапроект» ГО «Поселок Агинское»:
Проектная документация «Универсальная спортивная площадка» раздел АР Архитектурные решения 14.19-АР, 2019 г. 

Выполнен Отделом управления проектной деятельностью администрации муниципального района «Агинский район»: Локальный сметный расчет на строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский». 	Не требуется актуализация. Положительное заключение экспертизы на сметную стоимость № 75-1-0651-19 от 13.11.2019 г., выполнено ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края. 
	
	с. Дэлбэрхэй, с. Занта, пгт. Орловский	
3	Приобретение автобуса Газель НЕКСТ	Не требуется ПСД.
Запрос коммерческих предложений  		

8. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

N п/п	Наименование мероприятий	Наличие фактически профинансированных расходов за счет внебюджетных средств (да / нет) 1	Направления финансирования 2	Объем финансирования, тыс.рублей	Информация
о наличии подтверждающих документов 3	
				2019 год	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7	
	пгт. Орловский	
1	Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»	нет	-	-	-	-	
2	Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»	нет	-	-	-	-	

8.1. Сведения о фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз и осуществление строительства в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта

N п/п	Наименование мероприятий	Наличие фактически профинансированных расходов за счет бюджетных
средств (да / нет) 1	Направления финансирования 2	Объем финансирования, тыс.рублей	Информация о наличии подтверждающих документов 3	
				2019 год	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7	
	пгт. Орловский 	
1	Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»	да	Подготовка ПСД	0	195,0	Платежное поручение № 85830 от 29.10.2019	
			Проведение экспертизы (проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства «Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»	0	24,0	Платежное поручение № 819421 от 15.10.2019	
2	Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»	да	Проведение экспертизы (проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства «Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»)	0	24,0	Платежное 
поручение № 104033 от 30.10.2019	

9. Характеристика инвестиционных проектов, находящихся в процессе реализации, и инвестиционных проектов, начало реализации которых планируется в первый год реализации проекта:

N п/п	Наименование проекта	Сроки реализации	Планируемое
количество новых
рабочих мест, чел.	Инвестиции	
		дата начала реализации	дата завершения реализации		Источники
инвестиций 1	объем инвестиций, млн.рублей	
1	2	3	4	5	6	7	
	пгт. Орловский	
1	Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»	2021	2021	0	Средства федерального бюджета, средства бюджета Забайкальского края	14,843567

1,746302	
2	Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»	2021	2021	0	Средства федерального бюджета, средства бюджета Забайкальского края	2,581065

0,303654	
	с. Дэлбэрхэй, с. Занта, пгт. Орловский	
3	Приобретение автобуса Газель НЕКСТ	2021	2021	0	Средства федерального бюджета, средства бюджета Забайкальского края	После получения коммерческих предложений	

10. Сведения о выгодоприобретателях от реализации проекта:

N п/п	Наименование мероприятий проекта	Выгодоприобретатели от реализации мероприятий проекта	
		Жители	Хозяйствующие субъекты	
		Социальные группы 1	Прогнозная численность, чел.	Территория проживания 2	Группы / наименования 3	Прогнозное количество, ед.	Территория хозяйствования 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	пгт. Орловский 	
1	Капитальный ремонт здания МУК «Дом культуры» ГП «Орловский»	Все жители городского поселения «Орловский»	2365	Городское поселение «Орловский»	Все хозяйствующие субъекты	13	Городское поселение «Орловский»	
2	Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Орловский»	Все жители городского поселения «Орловский»	2365	Городское поселение «Орловский»	Все хозяйствующие субъекты	13	Городское поселение «Орловский»	
	с. Дэлбэрхэй, с. Занта, пгт. Орловский	
3	Приобретение автобуса Газель НЕКСТ	Все жители городского поселения «Орловский»	2365	Городское поселение «Орловский»	Все хозяйствующие субъекты	13	Городское поселение «Орловский»	

11. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта:

- Здание Дома культуры, 1971 года постройки, является культурно-досуговым центром, местом проведения культурно-массовых мероприятий. В Доме культуры созданы и ведутся кружки для творческих коллективов, проводятся сходы граждан. В указанном здании размещены помещения библиотеки, осуществляет свою деятельность участковая избирательная комиссия № 814. В помещениях Дома культуры в отопительный период не соблюдается температурный режим, в связи с нефункционирующей системой отопления. Низкая температура не позволяет в полной мере осуществлять деятельность МУК «Дом культуры» ГП «Орловский», посещение кружков, организация и проведение мероприятий с привлечением жителей, особенно детей, затруднительны, так как долгое нахождение в помещениях без верхней одежды не представляется возможным. По указанной причине жители неохотно посещают встречи, сходы, кружки и праздничные мероприятия. 
Здание Дома культуры требует капитального ремонта: полное обновление внутренней системы теплоснабжения и участка теплотрассы на вводе в здание, в тамбуре: заделка оконного проема, замена полов, обшивка потолка, осуществление выравнивания стен, побелка и покраска, в целях пожарной безопасности замена электропроводки и светильников. Дополнительно, в целях сохранности имущества на территории Дома культуры, необходимо установить видеонаблюдение.
Капитальный ремонт здания Дома культуры позволит соблюдать температурный режим в помещениях и, соответственно, на более высоком уровне проводить плановые и дополнительные культурно-массовые мероприятия, выставки художественно-прикладного искусства, презентации, встречи и сходы с жителями городского поселения «Орловский». Будут возможны приглашения творческих коллективов из других муниципальных образований. Пространство Дома культуры может стать основой для реализации творческих проектов. 

- Строительство универсальной спортивной площадки поможет в достижении следующих целей среди населения городского поселения «Орловский»: пропаганда здорового образа жизни; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом; повышение спортивного мастерства; укрепление дружеских и спортивных связей между спортсменами; выявление сильнейших спортсменов; подготовка к соревнованиям и спартакиадам различного уровня для представления городского поселения «Орловский».

- Приобретение автобуса Газель НЕКСТ позволит творческим коллективам и участникам культурно-массовых мероприятий осуществлять выезды в другие населенные пункты, представлять городское поселение «Орловский» на районных и краевых конкурсах. Появится возможность организовать пассажирские перевозки, что обеспечит доступность посещения и участия жителей с. Занта, с. Дэлбэрхэй в культурно-массовых, спортивных мероприятиях. Также автобус будет использоваться для иных муниципальных нужд (выезд призывной и допризывной молодежи на медицинскую комиссию, выезд спортсменов для участия в спартакиадах и др.). 

Все мероприятия, включенные в данный проект, требуют больших денежных вложений. В связи с этим, разработан проект комплексного развития городского поселения «Орловский». Провести капитальный ремонт и строительство социальных объектов, приобрести необходимое транспортное средство и спортивное оборудование по другим программам не представляется возможным из-за отсутствия дополнительных финансовых средств.

На территории пгт. Орловский в рамках комплексной программы в дальнейшем необходимо осуществить капитальный ремонт летнего водопровода; построить очистные сооружения, так как, при имеющейся системе водоотведения, откачка сточных вод производится вакуумной машиной и ЖБО сливаются на открытый грунт, что является нарушением природоохранного законодательства.  

12. Сведения об изменении уровня обеспеченности населения услугами в результате реализации мероприятий проекта:

N п/п	Объекты инфраструктуры	Уровень обеспеченности	
		Норматив обеспеченности 1	Нормативная потребность 2	Фактическая обеспеченность потребности 3	Планируемая обеспеченность потребности в результате реализации мероприятий проекта 4	Дополнительная потребность 5	
1	2	3	4	5	6	7	
	пгт. Орловский 	
1	Социальная инфраструктура	
1.1	Муниципальное образовательное учреждение «Орловская средняя общеобразовательная школа» (здание школы) (пгт. Орловский, ул. Промышленная, д. 10)	Следует принимать с учетом 100-процентного охвата детей неполным средним образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену	550 мест	550 мест	550 мест	0	
	Стадион	Норматив не установлен	11 500,0 кв. м.	11 500,0 кв. м.	11 500,0 кв. м.	0	
	Спортивный зал (пгт. Орловский, ул. Промышленная, д. 10а)	60 - 80 м площади пола на 1 тыс. чел.	765,3 кв. м.	765,3 кв. м.	765,3 кв. м.	0	
1.2.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Орловский детский сад «Солнышко» (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 6) (первое здание)
(пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 77) (второе здание)	в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%	

60 мест

50 мест

60 мест

19 мест	

60 мест

50 мест

0

0	
1.3.	Стационарное отделение «Исток» ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края (детский дом) (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 10)	3, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет)	19 мест	19 мест	19 мест	0	
1.4.	Орловская врачебная амбулатория (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 14)	Необходимая вместимость и структура учреждения определяется органами здравоохранения	436,4 кв. м.	436,4 кв. м.	436,4 кв. м.	0	
1.5.	Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» городского поселения «Орловский» (пгт. Орловский, ул. Клубная, д. 17)	80 посетительское место на 1 тыс. чел.; 50 - 60 м площади пола на 1 тыс. чел.	264 мест 573,0 кв. м.	264 мест 573,0 кв. м.	264 мест 573,0 кв. м.	0	
1.6.	Филиал муниципального межпоселенческого бюджетного учреждения культуры муниципального района «Агинский район» (пгт. Орловский, ул. Клубная, д. 17)	4 тыс. ед. хранения
2 читательское место на 1 тыс. чел. зоны обслуживания	9000 ед. хранения;
10 читательских мест	9000 ед. хранения;
10 читательских мест	9000 ед. хранения;
10 читательских мест	0	
1.7.	Аптека (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 13)	По заданию на проектирование	1 объект	1 объект	1 объект	0	
1.8.	Участковый пункт полиции (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, д. 12)	Норматив не установлен	1 объект	1 объект	1 объект	0	
2	Коммунальная инфраструктура	
2.1.	Котельная (пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 2)	Норматив не установлен	456,0 кв. м.	456,0 кв. м.	456,0 кв. м.	0	
2.2.	Водокачка (пгт. Орловский, ул. Оловяннинская, д. 29а)	Норматив не установлен	15,4 кв. м.	15,4 кв. м.	15,4 кв. м.	0	
2.3.	Водокачка (пгт. Орловский, ул. Оловяннинская, д. 4)	Норматив не установлен	21,0 кв. м.	21,0 кв. м.	21,0 кв. м.	0	
2.4.	Водокачка (пгт. Орловский, ул. Ононская, д. 8а)	Норматив не установлен	31,4 кв. м.	31,4 кв. м.	31,4 кв. м.	0	
2.5.	Водокачка (пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 10)	Норматив не установлен	17,4 кв. м.	17,4 кв. м.	17,4 кв. м.	0	
2.5.	Водокачка (пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 12)	Норматив не установлен	24,7 кв. м.	24,7 кв. м.	24,7 кв. м.	0	
2.6.	Водокачка (пгт. Орловский, ул. Переселенческая, д. 4)	Норматив не установлен	34,4 кв. м.	34,4 кв. м.	34,4 кв. м.	0	
2.7.	Теплотрасса для второго здания детского сада (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, 77)	Норматив не установлен	80 м	80 м	80 м	0	
2.8.	Котельная для второго здания детского сада (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, 77)	Норматив не установлен	100 кв. м.	100 кв. м.	100 кв. м.	0	
2.9.	Тепловые сети и сети холодного водоснабжения (пгт. Орловский)	Норматив не установлен	4615 м	4615 м	4615 м	0	
2.10.	Тепловые сети и сети холодного водоснабжения надземной прокладки (пгт. Орловский)	Норматив не установлен	1053 м	1053 м	1053 м	0	
2.11.	Сеть водоотведения (пгт. Орловский)	Норматив не установлен	970 м	970 м	970 м	0	
2.12.	Водокачка (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, б/н)	Норматив не установлен	16 кв. м.	16 кв. м.	16 кв. м.	0	
2.13.	Летний водопровод (пгт. Орловский)	Норматив не установлен	48000 м	48000 м	48000 м	0	
2.14.	Сооружения электроэнергетики ВЛ-0,4 кВ № 1, № 2 от ТП 6/0,4 кВ № 4 МСО (пгт. Орловский)	Норматив не установлен	1583 м	1583 м	1583 м	0	
2.15.	Сооружения электроэнергетики и сети	Норматив не установлен	Данные отсутствуют	Данные отсутствуют	Данные отсутствуют	0	
3	Транспортная инфраструктура	
3.1	Автомобильная дорога по маршруту Орловский - Чита	Норматив не установлен	196 км	196 км	196 км	0	
3.2	Автомобильная дорога по маршруту Орловский - Новорловск  - Агинское 	Норматив не установлен	30 км	30 км	30 км	0	
4	Телекоммуникационная инфраструктура	
4.1.	Почтовое отделение (пгт. Орловский, ул. 30 лет Победы, 12)	до 6 - характерное количество населения, обслуживаемое одним отделением связи, АПС, тыс.чел.	1 объект	1 объект	1 объект	0	
4.2.	Волоконно-оптическая линия связи ПАО «Ростелеком»	Норматив не установлен	Нет данных	Нет данных	Нет данных	0	
4.3.	Стационарная телефонная связь Бурятский филиал ПАО «Ростелеком»	Норматив не установлен	Нет данных	Нет данных	Нет данных	0	
4.4.	Сотовая связь и Интернет операторов связи МТС, Мегафон, Йота	Норматив не установлен	Нет данных	Нет данных	Нет данных	0	
4.5.	Беспроводная передача связи Интернет ООО «Эдэри» 	Норматив не установлен	Нет данных	Нет данных	Нет данных	0	
4.6.	Теле- и радиовещание (Забайкальский краевой радиопередающий центр – филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»	Норматив не установлен	20 бесплатных телеканалов цифрового вещания	20 бесплатных телеканалов цифрового вещания	20 бесплатных телеканалов цифрового вещания	0	

N п/п	Объекты инфраструктуры	Уровень обеспеченности	
		Норматив обеспеченности 1	Нормативная потребность 2	Фактическая обеспеченность потребности 3	Планируемая обеспеченность потребности в результате реализации мероприятий проекта 4	Дополнительная потребность 5	
1	2	3	4	5	6	7	
	с. Дэлбэрхэй 	
1	Коммунальная инфраструктура	
1.1.	Водокачка (скважина) (с. Дэлбэрхэй, д. 7)	Норматив не установлен	26,3 кв. м.	26,3 кв. м.	26,3 кв. м.	0	
1.2.	Сооружения электроэнергетики и сети	Норматив не установлен	Нет данных	Нет данных	Нет данных	0	
2	Телекоммуникационная инфраструктура	
2.1.	Теле- и радиовещание (Забайкальский краевой радиопередающий центр – филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»	Норматив не установлен	20 бесплатных телеканалов цифрового вещания	20 бесплатных телеканалов цифрового вещания	20 бесплатных телеканалов цифрового вещания	0	

N п/п	Объекты инфраструктуры	Уровень обеспеченности	
		Норматив обеспеченности 1	Нормативная потребность 2	Фактическая обеспеченность потребности 3	Планируемая обеспеченность потребности в результате реализации мероприятий проекта 4	Дополнительная потребность 5	
1	2	3	4	5	6	7	
	с. Занта 	
1	Коммунальная инфраструктура	
1.1.	Водокачка (скважина) (с. Дэлбэрхэй, д. 7)	Норматив не установлен	1 объект	1 объект	1 объект	0	
1.2.	Сооружения электроэнергетики и сети	Норматив не установлен	Нет данных	Нет данных	Нет данных	0	
2	Телекоммуникационная инфраструктура	
2.1.	Теле- и радиовещание (Забайкальский краевой радиопередающий центр – филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»	Норматив не установлен	20 бесплатных телеканалов цифрового вещания	20 бесплатных телеканалов цифрового вещания	20 бесплатных телеканалов цифрового вещания	0	
__________